ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ ПРИ МОСГОРИСПОЛКОМЕ
 ТРЕСТ МОСОРГСТРОЙ 

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА 

 КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 ОТДЕЛКА ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 КТ-19.0-9.3-82 

Москва - 1983 
Карты трудовых процессов разработаны отделом проектирования и внедрения прогрессивной технологии передовых методов труда треста Мосоргстрой (Л.К.Немцын, Т.И.Певзнер) совместно с нормативно-исследовательской станцией ЦНИБ "Мосстрой" (Л.Ф.Троицкая), согласованы с Управлением отделочных работ Главмосстроя (В.И.Мадин) и одобрены ВНИПИтруда в строительстве Госстроя СССР.
 
Карты разработаны на основе изучения и обобщения опыта работы паркетчиков СУ-90 объединения Мосотделстрой (звено А.Б.Зацепина и А.Ф.Гончарова) и треста Мосотделстрой N 11 (звено В.Т.Болтунова) и рекомендованы к внедрению при устройстве полов из штучного паркета. 

 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1. Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рациональных приемов труда.
 
2. Режим труда и отдыха принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов в соответствии с "Основами методики технического нормирования труда в строительстве".
 
3. Сокращение трудозатрат () составит:
 
а) КТ-1 по сравнению с местными нормами § 11-6-77:
 
; 
б) КТ-2 по сравнению с ЕНиР, § 19-9, табл.13:
 
; 
в) КТ-3 по сравнению с УНиР, § 2-51:
 
.

Карта трудового процесса строительного производства
 Отделка паркетных покрытий
 Входит в комплект карт ККТ-19.0-82 на устройство полов из штучного паркета 
	КТ-19.0-9.3-82 
Разработана трестом Мосоргстрой Главмосстроя с участием ЦНИБ "Мосстрой"
 Рассмотрена, откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство 

  

 1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
1.1. Карта предназначена для организации рабочих при отделке паркетных покрытий.
 
1.2. Показатели производительности труда:

	выработка на 1 чел.-дн., м 

	- 95,2;

	затраты труда на 10 м, чел.-ч 
	- 0,84. 

Примечание. В затраты труда входит время на подготовительно-заключительные работы (4%) и отдых (10%).

 2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА 
2.1. Готовый паркетный пол должен быть ровным и горизонтальным. При прикладывании в любом направлении двухметровой рейки просветы не должны превышать 2 мм.
 
2.2. Под паркетным покрытием не допускается наличие неприклеенных мест, определяемых простукиванием.
 
2.3. Шлифовку паркета производят не ранее, чем через 3 суток после его наклейки.
 
2.4. Перед началом работ с электрическими машинами необходимо проверить:
 
а) исправность заземления;
 
б) состояние проводов, целость изоляции, отсутствие излома жил.
 
2.5. Категорически запрещается устранять какие-либо неисправности во время работы машины.
 
2.6. При выполнении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве" и ГОСТ 12.0.004-79** "Организация обучения работающих безопасности труда". 
________________ 
* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;
 
** Взамен действует ГОСТ 12.0.004-90. - Примечания изготовителя базы данных.

 
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА 
3.1. Исполнители:
 
паркетчик IV разряда (П) - 1;
 
паркетчик III разряда (П) - 1.
 
3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

N п/п 
	Наименование, назначение и основные параметры
 
	ГОСТ, N чертежа, разработчик 
	Количество, шт. 
	
1. 
	Паркетно-шлифовальная машина СО-60 
	Одесский завод строительно-отделочных машин
       
	1 
	
2. 
	Цикли типа Ц-1 для циклевки отдельных провесов
       
	ГОСТ 12378-72 
	2 
	
3. 
	Щетка волосяная хозяйственная 
	ОСТ 17-180-72 Литовской ССР 
	1

  

 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
4.1. Работы по отделке паркетных покрытий выполняются в следующей последовательности:
 
циклевка отдельных провесов;
 
шлифовка уложенных покрытий.
 
4.2. Схема организации рабочего места

1 - паркетно-шлифовальная машина; 2 - цикля; 3 - щетка волосяная; П и П - паркетчики 
4.3. График трудового процесса 

Форма для заполнения графика трудового процесса

N п/п 
	Наименование операций 
	Время, мин 
	Продолжительность,
 мин 
	Затраты труда,
 чел.-мин

  
	  
	3 
	10 
	15 
	20 
	25 

	
1.
 
	Циклевка отдельных провесов 

	  

	  

2.
 
	Шлифовка пола 

	  

	  

Итого: на 10 м пола 

	

4.4. Описание операций

N по графику
 
	Наименование операций, их продолжительность*, исполнители, орудия труда, характеристики приемов труда 
	
1. 
	Циклевка отдельных провесов; 24 мин; П; цикля, щетка.
 Паркетчик П производят циклевку отдельных мелких провесов вручную циклей (рис.1), а затем очищает полы от стружки и пыли при помощи щетки.

2. 
	Шлифовка пола; 20 мин; П; шлифовальная машина.
 Паркетчик П производит шлифовку паркетного пола шлифовальной машиной (рис.2). Сначала поверхность шлифуют крупнозернистыми шкурками, а затем мелкозернистыми. Параллельные полосы должны перекрывать одна другую на 40-50 мм. При поворотах машины у стен шлифовальный барабан поднимают. При перемещении машины необходимо следить за равномерностью ее движения, т.к. даже минимальная задержка на одном место может привести к образованию поджогов.

________________
           * на 10 м пола.

     

Рис.1

Рис.2