КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)       

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, панелей       7,7
 Затраты труда на 1 панель, чел.-ч           1,04 

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Монтажник конструкций 5 разряда (М1) 
Монтажник конструкций 4 разряда (М2) 
Монтажник конструкций 2 разряда (М3) 
Электросварщик 5 разряда (С1) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой 
Трансформатор сварочный 
Инструмент электросварщика 
Держатель магнитный накладных деталей 
Молоток-топорик  
Щетка стальная (3 шт.) 
Кувалда массой 3 кг (2 шт.) 
Лом монтажный (3 шт.) 
Лопата строительная (3 шт.) 
Ящик-контейнер для раствора 
Ведро  
Рейка-отвес  
Ларь для закладных деталей на 10 отсеков 
Скребок стальной 
Шаблон  
До начала работ необходимо: 

- вынести на этаж базовые (продольные) оси; 

- подготовить монтажный горизонт; 

- установить по нивелиру монтажные маяки; 

- смонтировать объемные блоки на монтажной захватке; 

- доставить на рабочее место ящик с раствором, инструмент, приспособления, инвентарь.
 
Инструментальная проверка правильности установки наружных стеновых панелей производится в процессе монтажа при проверке монтажного горизонта каждого этажа.

 Описание операций
 
Устройство постели из готового раствора (рис.1) 

   
Рис.1 
Во избежание затекания раствора на лицевую поверхность наружной стеновой панели  нижележащего этажа монтажники устанавливают на панель шаблоны и с помощью  лопат укладывают в них раствор ровным споем на 0,5 см выше уровня монтажных маяков.

 Строповка и подача панели к месту установки 
М3, поднявшись на мостик панелевоза, зацепляет крюки стропа за монтажные петли и  подает машинисту крана сигнал натянуть строп. Затем спускается с панелевоза, ослабляет трос крепления панели на панелевозе, отходит  от грузовой платформы на расстояние 4-5 м и подает машинисту крана команду  приподнять панель на высоту 20-30 см от уровня грузовой платформы панелевоза.  Убедившись в надежности строповки, М3 дает команду на подъем и перемещение  панели к месту установки.

 Установка и выверка панели (рис.2)

Рис.2 
По команде М1 машинист крана подводит панель к месту установки. Монтажники  принимают панель и наводят ее на опорную поверхность. По команда М1 машинист крана плавно опускает и устанавливает панель на  подготовленную растворную постель. Незначительные отклонения панели от  фасадной плоскости ранее установленных панелей монтажники  устраняют с  помощью монтажных ломов. После этого М1 выверяет вертикальность панели рейкой-отвесом. М2 по его команде с помощью  монтажного лома приводит панель в проектное положение.

 Зачистка мест сварки 
М1 и М2 стальными щетками зачищают закладные детали блок-комнаты и  установленной панели от цементного молока, грязи, снега или наледи.

 Электроприхватка (рис.3)

                 
Рис.3 
С1 подтягивает к месту установки панели сварочные провода и устраивает  заземление. Затем производит электроприхватку крайних закладных деталей  установленной панели к закладным деталям блок-комнаты с помощью стальных  накладок. При сварке следует производить электродом небольшие возвратно-поступательные движения для обеспечения  лучшего провода.

 Расстроповка панели 
М1 подает машинисту крана сигнал ослабить строп и вместе с М2 отцепляет крюки  стропа от монтажных петель панели. Срезка монтажных петель С1 срезает монтажные петли на панели. Ток должен быть на 20% больше указанного  в паспорте.

 Зачистка поверхности сварного шва 
М1 и М2 с помощью молотка-топорика и металлической щетки зачищают поверхность сварного шва от шлака и окалины.

 Подготовка следующей панели к строповке 
М3 осматривает панель, проверяя ее целость и отсутствие дефектов, после чего очищает от грязи и раствора. При необходимости скалывает наплывы бетона с "гребешков" и закладных деталей, а  также выравнивает монтажные петли.