КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство дощатых и паркетных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ РЯДОВОГО ПОКРЫТИЯ ПАРКЕТНОГО ПОЛА

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 25,4
 
Затраты труда на 10 пола, чел-ч - 3,15 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Паркетчик 4-го разряда (П1)
 
Паркетчик 4-го разряда (П2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Молоток строительный паркетный (2 шт.) 

Добойник стальной паркетный (2 шт.) 

Рубанок с двойной железкой (2 шт.) 

Стамеска плоская с фасками шириной 8 и 25 мм (2 шт.) 

Клещи строительные 250 (2 шт.) 

Шнур разметочный капроновый длиной 15 м 

Уровень строительный 

Рейка деревянная длиной 2 м 

Рулетка 
 
Тележка-носилки для подноски паркета (2 шт.) 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- закончить общестроительные, санитарно-технические и  электромонтажные работы, за исключением установки санитарно-технических  приборов и электротехнической арматуры;
 
- закончить отделочные работы, за исключением последней  масляной окраски столярных изделий и панелей стен, а также  оклейки стен обоями; 

- настелить черные дощатые полы; 

- доставить на рабочее место инструмент и материалы. 

Описание операции 

 Разметка центральной линии и натягивание шнура
 
Паркетчики с помощью рулетки находят середину помещения  поперек досок черного пола, забивают по краям гвозди и  натягивают шнур на высоте, равной толщине паркета.

 Укладка картона под паркет 
Паркетчики подносят картон к рабочему месту и укладывают его  по черному полу поперек досок. 

Подача клепок на тележках-носилках (рис.1) 

   
Рис.1 
Паркетчики укладывают четыре пачки паркетных клепок на  тележку-носилки и подносят их к рабочему месту. 

Разбивка рядов паркетного пола по ширине помещения и укладка маячного ряда (рис.2) 

 Рис.2 
Паркетчики раскладывают паркетные клепки по всей ширине  помещения и определяют число рядов с учетом минимальной  обрезки последнего ряда примыкающего к фризовому.  Затем приступают к укладке маячного ряда, располагая клепки  под углом 45° к шнуру. Клепки укладывают так чтобы левый ряд  "елки" находился под шнуром, а углы клепок правого ряда на  линии шнура. Правый и левый ряды маячной "елки" укладывают одновременно, последующие - с обеих сторон "елки".  Клепки прибивают гвоздями после набора нескольких рядов, начиная с верхнего. Гребень клепки вгоняют в шпунт ранее уложенной и  прибитой гвоздями клепки с пристрожкой отдельных клепок  рубанком или подтеской стамеской. Шляпки гвоздей утапливают добойником.  В зависимости от длины клепки в продольный шпунт забивают  два-три гвоздя, в торцовый - один.

 Укладка клепок рядового покрытия (рис.3, 4)

   
Рис.3

Рис.4 
Клепки рядового покрытия пола паркетчики укладывают с двух  сторон тем же способом, что и первых двух маячных рядов, с той  разницей, что гребень угла клепки вдвигают в шпунт ранее уложенной клепки  и плотно к ней подгоняют с помощью мопотка и бобышки из клепки (чтобы не повредить шпунт). При необходимости клепки пристрогивают рубанком или подтесывают стамеской. Сплачивают клепки двумя  ударами: одним по продольной грани со стороны свободного торца, вторым  в свободный торец, обеспечивая продольное и торцовое сплачивание с ранее уложенными рядами. Затем клепки крепят гвоздями - сначала  прибивают торцовую сторону клепок предыдущего ряда, потом  продольную сторону настилаемого ряда. Закончив укладку одного ряда,  укладывают следующий, передвигаясь в обратном направлении.  При укладке последнего ряда у фриза гвозди забивают только в  продольную сторону клепок, так как углы торцовой стороны  необходимо обрезать для примыкания к фризу. Горизонтальность  уложенного покрытия проверяют с помощью рейки и уровня. Зазор  между рейкой и попом не должен превышать 1 мм. Зазоры между клепками допускаются не  более 0,3 мм.