КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ БЛОК-ОПАЛУБКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном - 61,5 
Затраты труда на демонтаж 1 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, чел.-ч - 0,13 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Слесарь строительный V разряда (С1 ) 

Слесари строительные IV разряда (С2, С3) 

Слесарь строительный II разряда (С4) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 6,3 т 

Домкрат винтовой 8 шт. 

Стяжка-распорка 8 шт. 

Стяжка металлическая 8 шт.
 
Клинья металлические 32 шт. 

Кувалда 3 шт. 

Скребок стальной для очистки опалубки 

Щетка фибровая на удлиненной ручке для смазки опалубки 

Лестница приставная высотой 2,6 м 

Ведро для эмульсии
 
Лом монтажный 3 шт.
 
Отвес  

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- демонтировать коридорную блок-опалубку; 

- убрать с деревянного настила блок-опалубки санузла все посторонние предметы;
 
- доставить в зону демонтажа и расположить на рабочем месте ящик с инструментами и металлическими деталями в соответствии со схемой организации рабочего места.
 
К демонтажу блок-опалубки санитарно-технического узла надо приступать после набора бетоном прочности 7-8 (сроки определяются лабораторией) 

 
Описание операций
 
Снятие временного закрепления подкосов (рис.1) 

Рис.1 
С1, С2 и СЗ раскрепляют зажимы подкосов и снимают их с монтажных петель плит перекрытия. Затем они вдвигают нижнюю часть подкоса в верхнюю, укорачивая подкосы так, чтобы они в свободном состоянии не доставали до низа опалубки.

 Выбивание металлических клиньев, снятие стяжек и стяжек-распорок (рис.2)

Рис.2 
С1, поднявшись на деревянный настил блок-опалубки санузла, выбивает кувалдой клинья из стяжек-распорок, после чего С2 и СЗ снимают стяжки-распорки из отверстий вертикальных балок опалубки. С2 и СЗ находятся по разные стороны опалубки и кувалдами выбивают металлические клинья из стяжек. Затем ударом кувалды С2 выбивает стяжки по одну сторону опалубки и вместе с СЗ вытаскивает их и собирает в металлический контейнер. 

Отрыв опалубочной панели от поверхности стены (рис.3) 

Рис.3 
С1, находясь на дощатом настиле блок-опалубки, устанавливает на уголки, приваренные к фермам опалубки, монтажные приспособления дли распалубки. С2 и СЗ, находясь на перекрытии, раскрепляют винты домкратов опалубочной панели и поднимают их опорную часть на высоту 40-50 см над перекрытием. После раскрепления винтовых домкратов С1 начинает поочередно вращать ручки приспособлений для распалубки до тех пор, пока не произойдет отрыв панели опалубки от вертикальной поверхности стены и панель не станет своей опорной частью на перекрытие. По команде СЗ машинист крана подает строп к опалубочной панели. 

Строповка и подъем панели от поверхности стены (рис.4) 

Рис.4 
С1 цепляет крюки поданного стропа за монтажные петли опалубки и дает команду машинисту крана натянуть ветви стропа. С1, убедившись в надежности строповки, переходит на дощатый настил блок-опалубки санузла и подает команду машинисту поднять панели. Машинист крана плавно поднимает опалубочную панель. С2 и СЗ придерживают панель при подъеме. 

Раскрепление винтовых домкратов блок-опалубки санузла (отрыв опалубочных панелей от стен) (рис.5) 

Рис.5 
С1, С2 и СЗ при помощи винтовых домкратов равномерно поднимают ядро блок-опалубки. При подъеме ядра происходит отрыв опалубочных панелей от поверхности стен. 

Строповка и подъем блок-опалубки санузла (рис.6) 

Рис.6 
С1 поднимается на дощатый настил блок-опалубки санузла и принимает поданный машинистом крама строп. С1 зацепляет крюки стропа за монтажные петли ядра блок-опалубки, переходит на соседнюю блок-опалубку санузла и подает команду машинисту крана на подъем опалубки. Машинист крана поднимает блок-опалубку и подает ее к месту очистки и смазки. 

Подъем, установка, очистка, смазка панели стены и блок-опалубок санузла (рис.7) 

Рис.7 
С4 принимает поданную опалубку, устанавливает ее на место и скребком на удлиненной ручке очищает поверхность палубы опалубки, оприкасающуюся с бетоном. После этого С4 смазывает фибровой щеткой очищенную поверхность палубы опалубки эмульсией.