КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Отделка фасадов мелкозернистыми материалами 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ УЧАСТКОВ ФАСАДА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, поверхности       163,3
 Затраты труда на 100 поверхности, чел.-ч   4,9

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Штукатур (маляр) 4 разряда (Ш1) 
Штукатур (маляр) 3 разряда (Ш2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Агрегат для фасадных работ АО-500 
Валик 2 шт 
Кисть-ручник 2 шт 
Ковш штукатурный 2 шт 
Ванночка с сеткой для окраски 2 шт 
Емкость для хранения краски в люльке 2 шт 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО:
 
- закончить работы по фактурной отделке стен, откосов фасада;
 
- установить агрегат АО-500 в рабочее положение и проверить его исправность:
 
- доставить в рабочую зону необходимые приспособления, инструмент, материалы.

 Описание операций

 Отводка примыканий к отделанным поверхностям (рис.1)

Рис.1 
Ш1 и Ш2, каждый в отдельности, обмакивают кисть в ванночку с краской и движением сверху  вниз отводят примыкания к отделанным поверхностям, окрашивая полоску шириной  10-15 см. Излишки краски на кисти при обмакивании отжимаются о сетку. При выполнении этих операций Ш1 и Ш2 находятся на противоположных концах люльки.

 Окраска поверхности (рис.2)

Рис.2 
Ш1 и Ш2, каждый в отдельности, обмакивают валик в краску. Излишки краски отжимаются о  сетку. Движениями валика сверху вниз и обратно Ш1 и Ш2 наносят краску на поверхность так, чтобы  не было наплывов и неокрашенных мест. постепенно сдвигая валик и окрашивая все новые участки. При этом Ш1 и Ш2 передвигаются по люльке с крайних положений  навстречу друг другу. Излишки краски на валике отжимаются о сетку.

 Окраска откосов (рис.3)

Рис.3 
Ш1 и Ш2, каждый в отдельности, обмакивая кисть в краску, отжимают излишки краски так, чтобы она не стекала на ручку кисти при переворачивании ее волосом вверх. Вначале отводят  потолочную часть откоса, примыкающую к переплету, затем отводят вертикальные и  горизонтальные примыкания. После этого с помощью той же кисти-ручника Ш1 и  Ш2 красят остальные участки откосов.

 Перемещение люлбки на следующую стоянку 
Ш2 управляет перемещением люльки с выносного пульта (установленного на люльке), а Ш1 следит за безопасностью ее движения по фасаду.