КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БЛОК-ОПАЛУБКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном - 80 
Затраты труда на монтаж 1 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, чел.-ч - 0,1 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Слесарь строительный V разряда (С1 ) 

Слесари строительные IV разряда (С2, С3) 

Слесарь строительный II разряда (С4) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 6,3 т 

Домкрат винтовой 8 шт. 

Стяжка-распорка 8 шт. 

Стяжка металлическая 8 шт. 

Клинья металлические 32 шт. 

Кувалда 3 шт. 

Распорка бетонная 8 шт.
 
Лом монтажный 3 шт.
 
Отвес
 
Лестница приставная высотой 2,6 м 2 шт. 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- закончить арматурные работы; 

- установить коридорную блок-опалубку стен; 

- установить и закрепить закладные детали, пробки и деревянные короба согласно рабочим чертежам;
 
- подготовить к работе блок-опалубку санузлов (очистить поверхность блок-опалубки, соприкасающейся с бетоном от остатков бетона и смазать эмульсией);
 
- нанести риски, определяющие места установки блок-олалубки санузлов;
 
- подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, приспособления и инструменты.
 
Расположение блок-секций санитарно-технических узлов опалубки необходимо строго выдерживать, как это установлено при комплектовании и подгонке секций. 

Описание операций
 
Строповка и подача блок опалубки санузла к месту установки (рис.1) 

Рис.1 
С4 по приставной лестнице поднимается на деревянный настил блок-опалубки санузла и принимает поданный машинистом крана строп. Затем С4 поочередно цепляет крюки стропа за монтажные петли ядра подготовленной блок-опалубки санузла и, убедившись в надежности строповки, спускается по лестнице вниз. Убрав лестницу и отойдя в безопасную зону, С4 дает команду машинисту крана подать блок-опалубку санузла на место установки. 

Установка бетонных распорок (рис.2) 

Рис.2 
С1, С2 и СЗ укладывают бетонные распорки на перекрытие в местах прохождения металлических стяжек в нижней части из щитов блок-опалубки санузла, следя за тем, чтобы отверстие в бетонной распорке совместилась с отверстием в щите опалубки. 

Прием и установка блок-опалубки сантехузла на место (рис.3) 

Рис.3 
С1, С2 и СЗ, приняв поданную краном блок-опалубку санитарно-технического узла, устанавливают ее на опорные части опалубочных панелей. С1 поднимается по приставной лестнице на деревянный настил блок-опалубки и стропит за монтажные петли вертикальных балок блок-опалубки. Убедившись в надежности строповки, С1 опускается по лестнице на перекрытие и дает команду машинисту крана слегка поднять блок-опалубку до полного ее раскрытия. Затем блок-опалубку устанавливают на перекрытие согласно нанесенным рискам. При необходимости С1, С2, СЗ рихтуют опалубку с помощью монтажных ломов.

 Выверка блок-опалубки сантехузла, расстроповка, установка опалубочных щитов в проектное положение при помощи домкратов (рис.4)

Рис.4 
С1 поднимается на деревянный настил блок-опалубки санузла, подает машинисту крана сигнал ослабить натяжение стропа и освободив крюки стропа от монтажных петель дает команду поднять строп. Затем С1 отвесом контролирует правильность установки щитов блок-опалубки и корректирует работу С2 и СЗ, которые в это время с помощью винтовых домкратов устанавливают панели блок-опалубки санузла в проектное положение.

 Установка металлических стяжек и стяжек-распорок с закреплением металлическими клинъями (рис.5)

Рис.5 
С1, находясь на деревянном настиле блок-опалубки санузла, устанавливает в отверстие вертикальных балок опалубки металлические стяжки-распорки. С2 и СЗ, стоя по разные стороны опалубочных панелей коридорной блок-опалубки и блок-опалубки санузла, пропускают через отверстия в щитах опалубки и бетонных распорках металлические стяжки, которые закрепляют с двух сторон при помощи кувалд металлическими клиньями.