КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОКРАСКЕ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ СОСТАВОМ 

Подготовка потолка 

Выработка на 1 чел.-день, поверхности потолков         20
 Затраты труда на 100 поверхности потолка, чел.-ч       40

 Исполнители 

Маляры 3-го разряда (М1, М2) 

Инструмент, приспособления, инвентарь 

Скребок стальной на удлиненной ручке для очистки поверхности 
Валик поролоновый для огрунтовки поверхности 
Ванночка с сеткой 
Шпатель деревянный (2 шт.) 
Шпатель стальной (2 шт.) 
Обойма для крепления лещади (2 шт.) 
Терка шарнирная ({2шт.) 
Столик-подмости складной (2 шт.) 
Колодка деревянная для крепления шкурки (2 шт.) 
Ящик для шпатлевки 400х500х150 мм (2 шт.) 
Ведро для грунтовки (2 шт.)
 
До начала работ необходимо:
 - закончить все строительно-монтажные, сантехнические и  электромонтажные работы в помещении; 
- просушить потолки (влажность бетонных и оштукатуренных поверхностей не должна превышать 8%); 
- отеплить помещение, обеспечив в нем температуру не ниже 16 °С; 
- доставить на рабочее место инструмент, приспособления и  инвентарь; 
- обеспечить рабочих защитными очками и респираторами. 

Шпатлевку приготавливают централизованно и доставляют на объект в специальной таре.
 Применение огрунтовочного состава на медном купоросе не разрешается. Рекомендуется следующий примерный состав грунтовки (мас. ч.): мыло хозяйственное - 20; клей малярный органический - 50; олифа - 6; вода - 24. 

 
Описание операций 

 Очистка поверхности потолка (рис. 1)

Рис.1 
М1 и М2, стоя на полу, стальными скребками очищают  поверхность потопка от затвердевших брызг раствора и шпатлевки. 

 Сглаживание поверхности потолка (рис. 2)

Рис.2 
М1 и М2 со столика-подмостей сглаживают поверхность  потолка лещадями, закрепленными в обоймах, удаляя следы  грубой затирки штукатурки. 

Расшивка трещин (рис.3) 

   
Рис.3 
М1 и М2, стоя на столиках-подмостях, углами шпателей расшивают трещины на глубину около 2 мм. Шпатели  держат под углом 45° к потолку. 

Огрунтовка поверхности (рис.4) 

   
Рис.4
 
М1, стоя на полу, погружает валик в ванночку с огрунтовочным составом, прокатывает его по сетке для снятия излишков и наносит состав на обрабатываемую поверхность.  М2 подносит огрунтовочный состав и наполняет им ванночку. 

Подмазка отдельных мест (рис. 5) 

   
Рис.5 
М1 и М2, стоя на стопиках-подмостях, заполняют шпатлевкой неровности на поверхности потолка. Затем шлифуют подмазанные и просохшие места с помощью шкурок,  закрепленных в деревянных колодках. 

 Шлифовка подмазанных мест 

 Сплошная шпатлевка поверхности 
М1 и М2, стоя на столиках-подмостях, наносят на поверхность потолка тонкий ровный слой шпатлевки, регулируя толщину наносимого слоя нажимом руки. Затем  сглаживают нанесенную шпатлевку, держа шпатели под углом  10-15° к поверхности. После нанесения и просушки  первого споя наносят второй слой шпатлевки. 

 Шлифовка шпатлеванной поверхности (рис.6)

   
Рис.6 
М1 и М2, стоя на полу, шлифуют прошпатлеванную поверхность шарнирными терками.

 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ 

Выработка на 1 чел.-день, поверхности потолков         175
 Затраты труда на 100 поверхности потолка, чел.-ч       4,56

 Исполнители 

Мапяр 4-го разряда (М1) 
Маляр 3-го разряда (М2) 

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
  
Установка УБРХ-1М для подачи и нанесения окрасочного состава 
Компрессор СО-7Д
 
До начала работ необходимо: 

- подготовить и просушить поверхность потолков; 
- проверить работу установки и компрессора; 
- доставить на рабочее место материалы и инструмент; 
- обеспечить рабочих защитными очками и респираторами.
 Эмульсионную поливинилацетатную краску ВА-27 приготовляют  централизованно и доставляют на объект в специальной таре. Хранить краску следует в помещении с положительной  температурой, а перед употреблением тщательно перемешивать. Наносить краску на поверхность, обработанную медным  купоросом, не разрешается. 

Описание операций 

 Огрунтовка поверхности (рис. 7)

Рис.7 
М1 и М2 проверяют качество краски, перемешивают и  заливают в бак установки. После пуска установки и компрессора  проверяют пистолет в работе. Затем М1 наносит огрунтовочный состав на поверхность потолка параллельными полосами, перекрывающими одна  другую на 4-5 см. При этом пистолет держит на расстоянии  35-40 см от потолка так, чтобы струя состава попадала на  поверхность максимально отвесно. М2 в процессе огрунтовки следит за установкой, регулирует равномерность подачи состава в шланг, подносит и добавляет состав в бак установки. 

 Первая окраска 
Проверив равномерность огрунтовки и просушив ее (1-2 ч), М1 и М2 приступают к окраске потолков. М1 проверяет исправность шлангов и работу пистолета, а затем наносит краску на поверхность так же, как и при огрунтовке, не допуская пропусков и подтеков. М2 выполняет в процессе окраски те же операции, что и при огрунтовке.

 Вторая окраска 
После непродолжительной выдержки (2 ч) М1 и М2  приступают к повторной окраске потолков и ведут  ее в том же порядке, как и первую.