КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 ИНСТРУКЦИЯ НА КЛЕЕВУЮ ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

 1. Очистка и сглаживание поверхности потолков 

 Исполнитель 
Маляр II разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Скребок стальной на удлиненной ручке для удаления с поверхности отвердевших частиц раствора и шпаклевки - 1;
 
Обойма для крепления лещади или пемзы (рис.1) - 1;

            
Рис.1. Обойма для крепления лещади или пемзы 
1 - корпус;
 
2 - прижимный винт;
 
3 - рукоятка;
 
4 - пемза или лещадь.
 
Столик-подмости - 1;
 
Респиратор противопыльный - 1;
 
Очки защитные - 1;
 
Шарнирная терка (рис.2) - 1.

Рис.2. Шарнирная терка для сглаживания поверхности 

       Последовательность операций 
До начала работ по очистке и сглаживанию поверхности потолков необходимо:
 
- разделать русты, заделать трещины и выбоины;
 
- хорошо просушить всю поверхность;
 
- доставить на рабочее место необходимые инструменты и инвентарь.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Поверхность потолка очищают от затвердевших частиц раствора и шпаклевки стальным скребком на удлиненной ручке, затем лещадью или искусственной пемзой, закрепленной в обойме, производят частичное сглаживание поверхности и, наконец, шарнирной теркой - полное.
 
Очистка поверхности потолка (скребок; рис.3). Маляр, стоя на полу, возвратно-поступательными движениями скребка счищает затвердевшие брызги раствора, шпаклевки и другие неровности

Рис.3. 
Частичное сглаживание поверхности (обойма с лещадью, столик-подмости; рис.4). Маляр, стоя на столике, лещадью или искусственной пемзой, закрепленной в обойме, круговыми движениями сглаживает поверхность, удаляя следы грубой очистки.

Рис.4. 
Сглаживание поверхности шарнирной теркой (шарнирная терка; рис.5). Маляр, стоя на полу и двигая терку в разных направлениях, полностью сглаживает поверхность потолка.

Рис.5. 

       

 2. Огрунтовка потолка за два раза 

 Исполнитель 
Маляр IV разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Электрокраскопульт с удочкой и шлангами для нанесения грунтовки - 1;
 
Ведро - 1;
 
Респиратор - 1;
 
Очки защитные - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по огрунтовке потолков необходимо:
 
- просушить, очистить от пыли и грязи, а также сгладить лещадью всю поверхность потолка;
 
- доставить на рабочее место требуемые инструменты, инвентарь и защитные средства;
 
- проверить исправность краскопульта.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по огрунтовке потолка выполняют в следующем порядке: сначала первая огрунтовка, а затем вторая с частичной шпаклевкой и шлифовкой неровных мест.
 
Первая огрунтовка поверхности потолка (электрокраскопульт, ведро, респиратор, защитные очки; рис.6). Маляр берет в правую руку удочку у регулирующего клапана, а левой рукой открывает клапан и регулирует мощность струи грунтовки. Держа форсунку перпендикулярно к поверхности потолка на расстоянии 75 см от него и медленно передвигаясь вперед, маляр делает удочкой плавные круговые движения и наносит равномерный слой грунтовки на поверхность потолка.

Рис.6. 
Вторая огрунтовка поверхности потолка (электрокраскопульт, ведро, респиратор, защитные очки). После просушки первого слоя грунтовки маляр делает вторую огрунтовку потолка таким же колером и в таком же порядке.

 3. Частичная подмазка поверхности потолков со шлифовкой подмазанных мест 

 Исполнитель 
Маляр II разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель деревянный для нанесения шпаклевочного слоя - 1;
 
Шпатель стальной для нанесения, разравнивания и заглаживания шпаклевочного слоя - 1;
 
Шарнирная терка для шлифовки прошпаклеванной поверхности - 1;
 
Ящик размером 300x200x150 мм для хранения шпаклевки - 1;
 
Столик-подмости - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по частичной подмазке и шлифовке подмазанных мест необходимо:
 
- утеплить помещение на период работы в холодное время;
 
- произвести первую огрунтовку потолков и просушить их;
 
- доставить на рабочее место необходимые инструменты, инвентарь, материалы и защитные средства.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Рабочие операции по частичной подмазке поверхности потолков выполняют в следующем порядке:
 
- подмазка отдельных мест готовой шпаклевкой;
 
- шлифовка подмазанных мест.
 
Частичная подмазка отдельных мест (стальной и деревянный шпатели, столик-подмости; рис.7). Маляр, стоя на полу или на столике, берет из ящика деревянным шпателем небольшое количество шпаклевки. Затем стальным шпателем снимает с него немного шпаклевки и наносит ее на поверхность потолка.
 
Далее маляр перекрещивающимися движениями разравнивает шпаклевку и заполняет мелкие трещины и неровности.

            
Рис.7. 
Шлифовка подмазанных мест (шарнирная терка; рис.8). Маляр, стоя на полу, шлифует подмазанные места шарнирной теркой. 

            
Рис.8. 

      

 4. Окраска поверхности потолков электрокраскопультом 

 Исполнители 
Маляр IV разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Электрокраскопульт с удочкой и, шлангами для окраски поверхности потолка - 1;
 
Ведро - 1;
 
Респиратор - 1;
 
Очки защитные - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по окраске потолков электрокраскопультом необходимо:
 
- отеплить помещение на период работы в холодное время;
 
- хорошо просушить поверхность потолков после второй огрунтовки;
 
- проверить исправность краскопульта;
 
- доставить на рабочее место требуемые материалы, инструменты и защитные средства;
 
- защитить с помощью бумаги окна, двери, встроенные шкафы и паркетные полы от загрязнения колером.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по окраске поверхности потолков выполняют в следующем порядке:
 
- подносят готовый колер и заправляют краскопульт;
 
- регулируют мощность струи колера;
 
- окрашивают потолок.
 
Окраска поверхности потолка (электрокраскопульт; рис.9). Маляр берет в правую руку удочку у регулирующего клапана, а левой открывает клапан и регулирует мощность струи колера. Держа форсунку перпендикулярно к поверхности потолка на расстоянии 75 см от него и медленно передвигаясь вперед, маляр делает удочкой плавные круговые движения и наносит равномерный слой клеевого колера на поверхность потолка.

Рис.9.