КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СТЕН МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, панелей 7,9 Затраты труда на установку панели, чел.-ч   0,99 

 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Монтажники 5 разряда (М1)
 Монтажники 4 разряда (М2)
 Такелажник 3 разряда (Т) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Строп двухветвевой грузоподъемностью 6,3 т Ящик-контейнер для раствора 
Рейка-отвес
 Столик-стремянка
 Подкос бесструбцинный с универсальным захватом 2 шт 
Лом монтажный  3 шт 
Лопата растворная  2 шт 
Молоток строительный 
Щетка для очистки закладных деталей 
Подштопка  2 шт 
Кувалда
 
До начала работ необходимо: 
- уложить плиты перекрытия над последним этажом; 

- в целях исключения передачи нагрузки от конструкций машинного отделения на плиты перекрытий необходимо уложить стальные монтажные подкладки 300х300х20, расположенные по краям панели;
 
- доставить на рабочее место инструмент, инвентарь, приспособления и материалы. 

 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

Подготовка панели к строповке 

Т проверяет качество закладных деталей и прочность монтажных петель панели.  При необходимости очищает панель от грязи и наплывов бетона. 

 Строповка панели 

Поднявшись на мостик панелевоза, Т зацепляет крюки стропа за монтажные петли  панели и дает команду машинисту крана натянуть строп. Убедившись в надежности строповки, Т спускается с мостика, отходит в безопасную  зону и дает сигнал машинисту крана поднять панель к месту установки. 

 Устройство постели из готового раствора с прокладкой из гернита (рис. 1)

Рис. 1 
М1 и М2 укладывают в горизонтальный стык упругую прокладку из  гернита, после чего лопатами укладывают раствор грядкой на место установки панели и разравнивают кельмами.

 Установка панели (рис. 2)

Рис. 2 

По сигналу М1 машинист крана подает панель к месту установки.  М1 и М2 принимают панель на расстоянии 20-30 см от перекрытия и устанавливают на готовую постель из раствора. 

 Выверка панели, временное крепление и расстроповка (рис. 3)

Рис. 3 

М1 и М2 с помощью монтажных ломов приводят низ панели в проектное положение.  Затем М1 устанавливает у панели (в местах выпуска монтажных петель) столик-стремянку, а М2 заводит в монтажные отверстия панели  универсальный захват. М1 поднимается на столик-стремянку, М2 зацепляет подкос за захват и подает верхний конец М1, который зацепляет его за монтажную петлю и закрепляет, закручивая гайку-барашек. Аналогично устанавливается второй подкос. Затем М1 прикладывает к панели рейку-отвес. М2 с помощью фаркопфа устанавливает панель в проектное положение. После закрепления панели  М1 дает сигнал машинисту крана ослабить натяжение ветвей стропа и монтажники расстроповывают панель. 

 Уплотнение раствора в горизонтальных швах 

С помощью подштопки М1 и М2 уплотняют раствор в горизонтальных швах по обе стороны  панели. Лишний раствор срезают кельмой,  подбирают лопатой и укладывают в  ящик или на место установки следующей панели. 

 Снятие временного крепления 

Временное крепление снимают после постоянного закрепления панели электросваркой. М1 и М2 со столиков-стремянок откручивают гайки-барашки и отцепляют подкосы от монтажных петель. Затем  вынимают захваты из монтажных петель перекрытия шахты лифта.