КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)       

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ СБОРНЫХ КОРИДОРНЫХ БЛОКОВ
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, панелей       12,5
 Затраты труда на 1 панель, чел.-ч           0,64 

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Монтажник конструкций 4 разряда (М1) 
Монтажник конструкций 3 разряда (М2) 
Монтажник конструкций 2 разряда (М3) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой 
Лом монтажный (3 шт.) 
Лопата строительная (2 шт.) 
Кельма  
Кувалда остроносая 
Ящик стальной для раствора 
Щетка стальная 
Скребок стальной на длинной ручке 
Ведро (2 шт.) 
Уровень строительный 
Временные крепления снимают только после сварки закладных деталей.
 
До начала работ необходимо:
 
- смонтировать все стеновые панели сборного коридорного блока;
 
- закончить сварку закладных деталей, панелей с закладными деталями объемных блок-комнат; 
- нанести антикоррозийное покрытие; 

- доставить на рабочее место материалы, инструмент, приспособления, инвентарь;
 
- из перекрываемой ячейки удалить лестницу;  
 
- обеспечить освещенность рабочего места в соответствии с действующими нормами. 

Разрыв по высоте между объемными блоками и сборными  коридорными блоками не допускается. Поставлять элементы на строительную площадку необходимо в строгом соответствии с транспортно-монтажной картой. При монтаже панелей перекрытия с приобъектного склада их запас должен быть не менее чем на один этаж дома. Срезку монтажных петель и сварку закладных деталей  производит звено сварщиков после проверки монтажного горизонта.

 Описание операций
 
Устройство постели из готового раствора (рис.1) 

Рис.1 
М1 и М2 укладывают раствор на опорные поверхности, подавая его лопатами из  ящика. Уложив раствор по одной панели, М2 продолжает укладывать по другой. М1 кельмой разравнивает раствор по опорным поверхностям,  расстилая его равномерным слоем заданной толщины. Просыпавшийся при этом раствор М2 подбирает лопатой в ведро и вываливает  в ящик с раствором.

 Строповка и подача панели к месту укладки 
М3 поднимается на грузовую платформу плитовоза, стропит панель, спускается с  плитовоза и отходит от него на 4-5 м в безопасную зону. Подает сигнал машинисту крана приподнять панель на 20-30 см.  Убедившись в надежности строповки, М3 дает машинисту крана команду подать панель к месту укладки.

 Укладка панели (рис.2)

Рис.2 
По команде М1 машинист крана подает панель в рабочую зону. М1 и М2  принимают панель на высоте 30-40 см от перекрытия, наводят ее на опорные поверхности и укладывают на растворную постель.

 Выверка и исправление положения панели (рис.3, 4)

   
Рис.3

Рис.4 
При выверке положения панели в плане машинист крана держит строп натянутым,  М1 и М2 проверяют правильность укладки панели и  рихтуют ее в проектное положение. Затем машинист крана ослабляет строп.  М1, прикладывая к поверхности панели уровень в продольном и поперечном направлениях, выверяет положение панели в горизонтальной плоскости.  При отклонениях от проектного положения М1 и М2 отцепляют один или два крюка с одной стороны панели, зацепляют за монтажные петли  "серьги", а за них - крюки стропа. По команде М1 машинист крана плавно поднимает край панели, М2 подкладывает раствор,  увеличивая толщину растворной постели. Затем плиту укладывают  и снова выверяют. При отклонении прием повторяют до тех пор, пока  панель не займет правильного положения.

 Расстроповка панели 
Машинист крана по команде М1 ослабляет строп. М1 и М2 отцепляют крюки от монтажных петель и "серег", а затем снимают "серьги".

 Подготовка следующей панели к строповке 
М3 осматривает поверхность панели, проверяет ломом прочность  монтажных петель и при необходимости очищает панель от грязи и наплывов бетона.