КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
ИНСТРУКЦИЯ НА ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ СО ШПАКЛЕВКОЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ 

1. Очистка и сглаживание поверхности потолков
 
Исполнители 
Маляры II разряда (М1, М2) - 2.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Скребок стальной с ручкой длиной 1,5 м - 1;
 
Приспособление шлифовальное с ручкой длиной 1,5 м - 1;
 
Кисть травяная с ручкой длиной 1,5 м - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить монтаж санитарно-технических и электрических сетей;
 
- заделать и оштукатурить отверстия и места сопряжений стеновых панелей (перегородок) и перекрытий;
 
- закончить устройство паркета (без циклевки) или других видов покрытий пола (кроме укладки линолеума и поливинилхлоридных плиток).
 
Сглаживание поверхности потолка производится в том случае, если потолки или их часть оштукатурены.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по очистке и сглаживанию поверхности потолка выполняют в следующем порядке:
 
- скребком очищают поверхность потолка от грязи;
 
- сглаживают очищенную поверхность с помощью шлифовального приспособления;
 
- сметают пыль с поверхности потолка травяной кистью.
 
Работы ведутся одновременно в двух комнатах. Пока маляр М2 в одной из комнат очищает поверхность потолка, маляр М1 в другой комнате сглаживает очищенную поверхность и сметает с нее пыль.
 
Очистка поверхности потолка (скребок; рис.1). Маляр М2, держа скребок одной рукой за конец ручки, а другой - на расстоянии 50-60 см от конца, скользящими движениями вперед с небольшим нажимом очищает загрязненные участки потолка. При этом скребок он держит под углом 45° к поверхности.

                      
Рис.1. 
Сглаживание очищенной поверхности потолка (шлифовальное приспособление; рис.2). Маляр М1, держа шлифовальное приспособление так же, как скребок, прикладывает рабочую часть его к обрабатываемой поверхности потолка и поступательно-возвратными движениями сглаживает ее, перемещаясь вперед по мере обработки поверхности.     

     
 Рис.2. 
Сметание пыли с поверхности потолка (травяная кисть). Маляр М1 легкими колебательными движениями кисти вправо и влево сметает пыль с поверхности потолка, отступая по мере очистки потолка назад.

 2. Расшивка трещин и частичная подмазка поверхности потолков
 
Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1. 

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель со стальным лезвием шириной 30 см - 2;
 
Шпатель стальной узкий - 2;
 
Столик-подмости размером 1400х1000х800 мм - 2;
 
Ведро для шпаклевки - 3.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо тщательно проверить качество штукатурки всех потолков, подлежащих обработке, а также подготовить и доставить на рабочее место инструменты, инвентарь и готовую шпаклевку.
 
В состав шпаклевки не должны входить компоненты, химически влияющие на последующие слои (огрунтовки, окраски).
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по расшивке трещин и частичной подмазке поверхности потолков выполняют в следующем порядке:
 
- устанавливают на рабочем месте столики-подмости;
 
- укладывают на них материалы и инструменты;
 
- расшивают трещины и подмазывают отдельные места.     

                 
Рис.3. Организация рабочего места. 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1 - столики-подмости;
 
2 - направление ведения работ
 
Расшивка трещин и подмазка отдельных мест (широкие и узкие шпатели; рис.4, 5). Расшивку трещин маляры производят за два движения. Упираясь одной рукой в потолок, другой рукой маляр расшивает узким шпателем трещину в штукатурке на глубину около 2 мм. При этом плоскость шпателя должна быть наклонена вправо под углом примерно в 60° к поверхности потолка. При повторном движении плоскость шпателя наклоняют влево.

                      
Рис.4.
 
Затем левой рукой маляр набирает узким шпателем шпаклевку и накладывает ее на широкий шпатель, который держит в правой руке. Упираясь левой рукой в потолок, а правой прижимая лезвие широкого шпателя к поверхности потолка под углом в 30°, маляр ведет его вперед, нанося шпаклевочный состав на поверхность потолка. Подмазку трещин и выравнивание нанесенного слоя производят движениями узкого шпателя поперек и вдоль трещины. По ходу работ маляры переставляют свои столики-подмости.

Рис.5.

      
 3. Огрунтовка поверхности потолков
 Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1. 

Инструмент, приспособления, инвентарь 
Удочка универсальная в комплекте со шлангами - 1;
 
Бак красконагнетательный - 1;
 
Компрессор - 1. 

Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- очистить, выровнять, сгладить и хорошо просушить поверхность потолков;
 
- доставить на рабочее место материалы и механизмы;
 
- закрыть бумагой оконные переплеты, двери, шкафы и прочие деревянные изделия;
 
- проверить исправность механизмов и оснастки.
 
Влажность поверхностей, подготовляемых под окраску, не должна превышать 8%. Работы следует производить в помещениях с температурой воздуха не ниже +8°С.
 
Красконагнетательный бак СО-13 устанавливают так, чтобы иметь возможность вести работы на двух этажах без его перестановки (обычно на промежуточной лестничной площадке).
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по огрунтовке поверхности потолков выполняют в следующем порядке:
 
- заправляют красконагнетательный бак огрунтовочным составом;
 
- подготовляют инструменты, приспособления и инвентарь;
 
- наносят огрунтовочный состав с помощью универсальной удочки на поверхность потолка.

                     
Рис.6. Организация рабочего места 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1 - красконагнетательный бак со шлангами;
 
2 - запасная емкость с огрунтовочным составом;
 
3 - ведро;
 
4 - направление движения маляра в процессе работы.
 
Нанесение огрунтовочного состава на поверхность потолка (удочка; рис.7). Маляр М1, держа универсальную удочку одной рукой у регулирующего клапана, а другой за конец удлинительной трубки, становится в исходное положение вполоборота к торцовой стене. Затем он подносит форсунку удочки к потолку и, держа ее на расстоянии 75-90 см от него, нажимает на клапан. Маляр направляет струю окрасочного состава перпендикулярно поверхности потолка и движется вдоль торцовой стены, производя удочкой круговые движения. Закончив обработку одной полосы потолка, он движется в обратном направлении.

                      
Рис.7. 
Заправка бака огрунтовочным составом, регулировка режима работы. Маляр М2 заправляет красконагнетательный бак окрасочным составом, регулирует давление в нем, включает к выключает подачу состава.

 4. Покрытие потолков полимерцементным шпаклевочным составом
 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляры III разряда (М2, М3, М4) - 3.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Удочка универсальная в комплекте со шлангами - 1;
 
Шпатель стальной с резиновой вставкой на удлиненной ручке длиной 1,5 м - 2;
 
Установка для нанесения шпаклевочного состава - 1;
 
Емкость для шпаклевки объемом 0,5 м - 1;
 
Ведро - 1. 

Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- подготовить поверхность потолка;
 
- доставить на рабочее место требуемые материалы;
 
- закрыть бумагой оконные переплеты, двери и прочие деревянные изделия.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по покрытию потолков полимерцементным шпаклевочным составом выполняют в следующем порядке:
 
- заправляют установку СО-21 шпаклевочным составом и регулируют режим работы;
 
- наносят шпаклевочный состав на поверхность потолка и разравнивают нанесенный слой шпателем;
 
- переносят из комнаты в комнату инструменты, инвентарь и приспособления.
 
После высыхания первого слоя шпаклевочного состава наносят второй слой и разравнивают его.

                      
Рис.8. Организация рабочего места 
М1, М2, М3, М4 - рабочие места маляров;
 
1 - установка СО-21 со шлангами;
 
2 - емкость со шпаклевочным составом;
 
3 - направление движения маляров
 
Нанесение шпаклевочного состава на поверхность потолка (универсальная удочка, установка СО-21; рис.9). Маляр М1, держа удочку за удлиненную трубку так, чтобы форсунка была перпендикулярна поверхности потолка и находилась на расстоянии 60-70 см от него, нажимает на регулировочный клапан. Такое положение удочки обеспечивает наиболее равномерное нанесение слоя шпаклевки. Потолок обрабатывают плавными круговыми движениями удочки до получения матовой поверхности. Во время работы маляр передвигается назад параллельно торцовой стене. Нанеся полосу шпаклевки, маляр переходит вглубь комнаты и повторяет операцию.

                      
Рис.9. 
Разравнивание нанесенного слоя (шпатели, деревянный ящик; рис.10). Маляры М2 и М3 одновременно на разных участках подносят шпатели к поверхности потолка под углом в 65-80° и движениями на себя разравнивают участок шириной 80-90 см. Для очистки шпателя маляр прижимает его плоскость к ребру боковой стенки ящика и скользящими движениями снимает с поверхности шпателя шпаклевку.

                    
Рис.10. 
Заправка установки СО-21 шпаклевочным составом и регулировка режима работы. Маляр М4 заправляет установку СО-21 шпаклевочным составом, регулирует давление в одном из бачков до рабочего и включает подачу состава в удочку. При израсходовании шпаклевочного состава в первом бачке, он подключает к работе другой бачок и заправляет первый. Во время обработки потолка другими малярами маляр М4 следит за режимом работы установки.

 5. Окраска потолков
 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1. 

Инструмент, приспособления, инвентарь 
Удочка универсальная в комплекте со шлангами - 1;
 
Бак красконагнетательный - 1;
 
Компрессор - 1. 

Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- покрыть поверхность потолка полимерцементным шпаклевочным составом за два раза;
 
- доставить на рабочее место требуемые материалы;
 
- проверить исправность оборудования;
 
- закрыть бумагой оконные переплеты, двери и прочие деревянные изделия.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по нанесению окрасочного состава на потолки выполняют в следующем порядке:
 
- подготовляют инструменты, приспособления и инвентарь;
 
- заправляют красконагнетательный бак окрасочным составом и выравнивают давление в нем до рабочего;
 
- переносят в квартиру удочки со шлангами;
 
- проверяют регулирующий клапан и сопло;
 
- удочкой наносят окрасочный состав на поверхность потолка.

                      
Рис.11. Организация рабочего места 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1 - красконагнетательный бак со шлангами;
 
2 - запасная емкость с окрасочным составом;
 
3 - ковш;
 
4 - направление ведения работ.
 
Нанесение огрунтовочного состава на поверхность потолка (удочка; рис.12). Маляр М1, держа универсальную удочку одной рукой у регулирующего клапана, а другой за конец удлинительной трубки, становится в исходное положение вполоборота к торцовой стене. Затем он подносит форсунку удочки к потолку и, держа ее на расстоянии 75-90 см от него, нажимает на клапан. Маляр направляет струю окрасочного состава перпендикулярно поверхности потолка и движется вдоль торцовой стены, производя удочкой круговые движения. Закончив обработку одной полосы потолка, он движется в обратном направлении.

                 
Рис.12.
 
Заправка бака огрунтовочным составом, регулировка режима работы. Маляр М2 заправляет красконагнетательный бак окрасочным составом, регулирует давление в нем, включает к выключает подачу состава.