КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БЛОК-ОПАЛУБКИ СТЕН ШАХТ ЛИФТОВ
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном - 44 
Затраты труда на монтаж 1 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, чел.-ч - 0,18 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Слесарь строительный V разряда (С1) 

Слесари строительные IV разряда (С2, С3) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 6,3 т 

Домкрат винтовой 8 шт. 

Стяжка-распорка 8 шт. 

Стяжка металлическая 8 шт. 

Клинья металлические 32 шт. 

Распорка бетонная 8 шт. 

Кувалда 3 шт. 

Лом монтажный 3 шт. 

Отвес 
 
Скребок стальной для очистки опалубки 2 шт.
 
Щетка фибровая на удлиненной ручке для смазки опалубки 2 шт. 

Ведро для эмульсии 

Лестница приставная высотой 2,6 м 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- закончить все бетонные работы на предыдущем этаже; 

- уложить плиты перекрытия нижележащего этажа; 

- доставить в зону монтажа и расположить на рабочем месте ящик с инструментом и металлическими деталями в соответствии со схемой организации рабочего места.
 
Подготовить к работе и проверить такелажную оснастку и приспособления. 

 
Описание операций
 
Строповка и окончательная установка блок-опалубки стен шахты лифтов (рис.1) 

Рис.1 
С2 по приставной лестнице поднимается на дощатый настил блок-опалубки стен шахт лифтов и, освободив крюки стропа из монтажных петель ядра блок-опалубки, цепляет их за монтажные петли вертикальных балок блок-опалубки. С2 спускается по лестнице на перекрытие и подает команду машинисту крана поднять блок-опалубку. Незначительным подъемам с помощью башенного крана добиваются полного раскрытия блок-опалубки, и она, опускаясь, точно устанавливается по размерам. При необходимости С1, С2 и СЗ производят рихтовку блок-опалубки при помощи монтажных ломов.

 Выверка блок-опалубки стен шахты лифта, расстроповка, установка блок-опалубки с помощью домкратов в проектное положение (рис.2)

Рис.2 
С1, С2 и СЗ по приставной лестнице поднимаются на дощатый настил блок-опалубки. С2 и СЗ через специальный люк спускаются внутрь блок-опалубки шахты лифта. С1 расстроповывает блок-опалубку и подает команду машинисту крана поднять строп. С1 с помощью отвеса контролирует правильность установки панелей блок-опалубки по вертикали и корректирует работу С2 и СЗ. С2 и СЗ в это время с помощью винтовых домкратов устанавливают блок-опалубку стен шахт лифтов в проектное положение. 

Очистка и смазка полубы блок-опалубки стен шахты лифта (рис.3) 

Рис.3 
При помощи скребков на удлиненных ручках С2, СЗ очищают поверхность палубы блок-опалубки от остатков налипшего бетона. Затем С2 и СЗ смазывают фибровыми щетками очищенную поверхность палубы блок-опалубки стен шахты лифта эмульсией. 

Установка бетонных распорок (рис.4) 

 Рис.4 
С1 укладывает бетонные распорки на перекрытие в местах прохождения металлических стяжек в нижней части щитов блок-опалубки стен шахты лифтов, совмещая отверстия в бетонной распорке с отверстием в щитах блок-опалубки. 

Установка металлических стяжек и стяжек-распорок с закреплением их металлическими клиньями (рис.5) 

 Рис.5 
Установка металлических стяжек и стяжек-распорок, закрепление их металлическими клиньями производится после установки смежных с блок-опалубкой шахты лифта опалубочными панелями, блок-опалубкой санузла и коридорной блок-опалубкой стек. Поднявшись по приставной лестнице на деревянный настил, С1 и С2 принимают от СЗ стяжки-распорки. С2 спускается внутрь блок-опалубки стен шахты лифта и вместе с СЗ устанавливает стяжки, которые закрепляют с двух сторон при помощи кувалд металлическими клиньями. С1 устанавливает в отверстие вертикальных балок опалубки металлические стяжки-распорки, которые затем закрепляют при помощи кувалды металлическими клиньями. С2, закончив работу, поднимается на дощатый настил и спускается вместе с С1 на перекрытие по приставной лестнице.