ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ ПРИ МОСГОРИСПОЛКОМЕ
 ТРЕСТ МОСОРГСТРОЙ 

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА 

 КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА 

 КТ-19.0-9.2-82 

Москва - 1983 
Карты трудовых процессов разработаны отделом проектирования и внедрения прогрессивной технологии передовых методов труда треста Мосоргстрой (Л.К.Немцын, Т.И.Певзнер) совместно с нормативно-исследовательской станцией ЦНИБ "Мосстрой" (Л.Ф.Троицкая), согласованы с Управлением отделочных работ Главмосстроя (В.И.Мадин) и одобрены ВНИПИтруда в строительстве Госстроя СССР.
 
Карты разработаны на основе изучения и обобщения опыта работы паркетчиков СУ-90 объединения Мосотделстрой (звено А.Б.Зацепина и А.Ф.Гончарова) и треста Мосотделстрой N 11 (звено В.Т.Болтунова) и рекомендованы к внедрению при устройстве полов из штучного паркета. 

 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1. Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рациональных приемов труда.
 
2. Режим труда и отдыха принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов в соответствии с "Основами методики технического нормирования труда в строительстве".
 
3. Сокращение трудозатрат () составит:
 
а) КТ-1 по сравнению с местными нормами § 11-6-77:
 
; 
б) КТ-2 по сравнению с ЕНиР, § 19-9, табл.13:
 
; 
в) КТ-3 по сравнению с УНиР, § 2-51:
 
. 
		
Карта трудового процесса строительного производства
 Настилка полов из штучного паркета
 Входит в комплект карт ККТ-19.0-82 на устройство полов из штучного паркета 
	КТ-19.0-9.2-82 
Разработана трестом Мосоргстрой Главмосстроя с участием ЦНИБ "Мосстрой"
 Рассмотрена, откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство       

  

 1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при настилке полов из штучного паркета.
 
1.2. Показатели производительности труда:

	выработка на 1 чел.-дн., м 
	- 13,6;

	затраты труда на 10 м, чел.-ч. 
	- 5,85. 

Примечание. В затраты труда входит время на подготовительно-заключительные работы (4%) и отдых (10%).

 2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА 
2.1. До начала работ необходимо подготовить основание согласно карте КТ-1.
 
2.2. Штучный паркет должен удовлетворять требованиям ГОСТ 862.1-76* "Паркет штучный. Технические условия". 
________________ 
* Взамен действует ГОСТ 862.1-85. - Примечание изготовителя базы данных.
 
2.3. Планки паркета не должны иметь трещин, околов и загнивших мест.
 
2.4. Влажность паркета при укладке должна быть в пределах 9±3%.
 
2.5. Штучный паркет нужно хранить в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха 50-60%.
 
2.6. В зимнее время штучный паркет необходимо выдержать до укладки в теплом помещении не менее суток.
 
2.7. Влажность основания из древесноволокнистых плит должна быть не выше 12%.
 
2.8. При устройстве полов из штучного паркета относительная влажность воздуха в помещениях не должна превышать 60%, температура воздуха должна быть не ниже 5 °С.
 
2.9. Зазоры между планками уложенного паркетного покрытия не должны превышать 0,3 мм, а между планками паркета и стенами или перегородками - 15 мм.
 
2.10. При выполнении работ необходимо соблюдать правила СНиП III-В.14-72 "Полы. Правила производства и приемки работ", СНиП III-4-80** "Техника безопасности по устройству полов в жилых и общественных зданиях" (ВСН-35-80). 
________________ 
* Взамен СНиП III-В.14-72 действуют СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87;
 
** Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечания изготовителя базы данных.

 3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА 
3.1. Исполнители:
 
паркетчик IV разряда (П) - 1;
 
паркетчик III разряда (П) - 1.
 
3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь. 
				
N п/п 
	Наименование, назначение и основные параметры
 
	ГОСТ, N чертежа, изготовитель 
	Количество, шт. 
	
1. 
	Распиловочная машина ИЭ-6902 
	Одесский завод строительно-отделоч. машин 
	1

2. 
	Молоток паркетный типа МПА 
	ГОСТ 11042-72* 
	2

2а. 
	Молоток плотничный типа МПЛ 
      
	ГОСТ 11042-72* 
	2 
	
3. 
	Гребенка для разравнивания мастики
       
	Черт. ИР-147 ВНИИСМИ Минстройдормаша 
	1 
	
4. 
	Бачок для мастики 
	Черт. 806.00.00 Управление механизации отделочных работ объединения Мосотделстрой
       
	1 
	
5. 
	Ковш для разливки мастики типа КМ 
	ОСТ 22-686-72
       
	1 
	
6. 
	Рейка контрольная длиной 2 м 
	Черт. ТЭ-276 треста Оргстрой Минстроя ЭССР 
	1

7. 
	Уровень строительный УС-2-300 
	ГОСТ 9416-76** 
	1

8. 
	Шнур разметочный в корпусе 
	ТУ 22-3527-76 
	1

________________ 
* Действует ГОСТ 11042-90;
 
** Взамен действует ГОСТ 9416-83. - Примечания изготовителя базы данных.
 
3.3. Расход материалов на 100 м пола:

	паркет штучный, м
 
	- 102 
		
	мастика битумная холодная, кг 
	- 80 

  

 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
4.1. Работы по настилке полов из штучного паркета выполняются в следующей последовательности:
 
устройство полов начинают с укладки насухо "змейки" из паркетных планок поперек помещения. Если удается разместить в "змейке" целое число планок, то пол настилают в соответствии с расположением планок, уложенных "в змейке". Если целое число планок "в змейке" не укладывается, то ее смещают так, чтобы добиться наименьших отходов паркета и симметрии пристенных рядов;
 
натягивание маячного шнура: для укладки первой "елки" натягивают шнур вдоль длинной оси помещения. В больших помещениях шнур натягивают через середину. Центральное положение маячной "елки" обеспечивает правильность рисунка и дает возможность вести настилку паркета одновременно вправо и влево от нее; в небольших помещениях (до 20 м) маячную "елку" можно укладывать вдоль стены, наиболее удаленной от входа;
 
подбор звена маячной "елки";
 
нанесение мастики на основание;
 
укладка маячного ряда;
 
нарезка и подгонка планок;
 
укладка рядового паркета;
 
покрытие полов крафт-бумагой.
 
4.2. Схема организации рабочего места

1 - распилочная машина; 2 - бачок для мастики; 3 - гребенка для разравнивания мастики; 4 - маячный шнур; П и П - паркетчики 
4.3. График трудового процесса 

Форма для заполнения графика трудового процесса

N п/п 
	Наименование операций 
	Время, мин 
	Продолжи-
 тельность, мин 
	Затраты труда, чел.-мин 

	  
	20 
	40 
	60 
	80 
	100 
	120 
	140 
	160

	  
	
1. 
	Разметка основания

	  

	  

	  

	
2. 
	Натягивание маячного шнура

	  

	  

	  

	
3. 
	Подбор звена маячной "елки"

	  

	  

	  

	
4. 
	Нанесение мастики на основание

	  

	  

	  

	
5. 
	Укладка маячного ряда

	  

	  

	  

	
6. 
	Нарезка планок

	  

	  

	  

	
7. 
	Укладка рядового паркета

	  

	  

	  

	
8. 
	Покрытие полов бумагой

	  

	  

	  

	
  
	Итого на 10 м основания

	  

4.4. Описание операций

N по графику 
	Наименование операций, их продолжительность*, исполнители, орудия труда, характеристика приемов труда 

1. 
	Разметка основания; 4 мин; П, П; молоток паркетный
 Паркетчики Пи П укладывает насухо "змейку" из паркетных планок поперек помещения, сплачивая планки при помощи паркетного молотка (рис.1).

2. 
	Натягивание маячного шнура; 4 мин; П, П; молоток, шнур разметочный.
 Паркетчики П и П натягивают шнур вдоль длинной стены помещения между двумя гвоздями. Точки для забивки гвоздей выбирают так, чтобы шнур проходил через угол, образованный двумя планками, уложенными в "змейке". Гвозди забивают на такую глубину, чтобы натянутый под их шляпками шнур находился от пола на высоте, равной толщине паркета.

3. 
	Подбор звена маячной "елки", 13 мин; П; молоток паркетный.
 Паркетчик П собирает насухо звено из 6-8 планок, сплачивая их при помощи паркетного молотка (рис.2).

4. 
	Нанесение мастики на основание; 30 мин; П; бачок для мастики, гребенка.
 Паркетчик П из бачка разливает мастику тонкой струей на основание и разравнивает гребенкой до толщины слоя 0,8-0,9 мм. Ширина полосы мастики должна быть немного больше ширины укладываемого ряда планок.

5. 
	Укладка маячного ряда; 20 мин; П; молоток паркетный. 

	Паркетчик П подготовленное звено маячной "елки" укладывает на мастику так, чтобы углы паркетных планок находились на линии шнура. Угол между ребрами планки и шнуром должен составлять 45°. От уложенного звена продолжают настилку маячного ряда, укладывая планки строго на шнуру и сплачивая их ударом молотка (рис.3).

6. 
	Нарезка и подгонка планок; 21 мин; П, П; распиловочная машина.
 Паркетчики П и П производят нарезку планок на распиловочной машине, предварительно разметив их по необходимым размерам.

7. 
	Укладка рядового паркета; 84 мин; П, П; молоток паркетный, бачок для мастики, гребенка. Паркетчик П подносит мастику, разливает на основание (рис.4) и разравнивает гребенкой. Паркетчик П укладывает на мастику планки приемом "на себя".
 Скошенной частью паркетного молотка паркетчик ударяет по наружному продольному ребру планки, вбивая гребень в шпунт планки, уложенной ранее; вторым ударом в торец планки он прижимает противоположную ее сторону. Окончив один ряд, паркетчик настилает следующий, двигаясь в обратном направлении.
 При укладке паркета по периметру помещения в зазоры между стенами (перегородками) и настланным паркетом вставляют деревянные клинья (с шагом 50-60 см) для временного закрепления настланного пола. Перед установкой плинтусов клинья вынимают.

8. 
	Покрытие полов бумагой; 6 мин; П, П; молоток.
 Паркетчики П и П закрывают настланный паркет крафт-бумагой или пергамином. Бумагу закрепляют полосками из отходов древесноволокнистых плит, прибивая их штукатурными гвоздями.

__________________ 
* на 10 м пола.

Примечание. При использовании при сплачивании планок плотничного молотка вместо паркетного удары по планке можно наносить только через деревянную прокладку.

     

Рис.1 

Рис.2 

Рис.3 

Рис.4