КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ НА УЛУЧШЕННУЮ МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ОШТУКАТУРЕННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 

1. Подготовка поверхности 

 Исполнители
 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Скребок стальной на удлиненной ручке - 2;
 
Шпатель деревянный шириной 10 см - 4;
 
Шпатель деревянный шириной 20 см - 4;
 
Ванночка с сеткой - 1;
 
Шпатель стальной - 2;
 
Ведро - 2;
 
Валик меховой на удлиненной ручке - 1;
 
Кисть-ручник - 2;
 
Обойма для крепления лещади - 2;
 
Колодка для крепления шлифовальной шкурки - 2;
 
Терка шарнирная - 2;
 
Столик-подмости складной - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо обеспечить рабочих инструментами и приспособлениями.
 
Влажность оштукатуренной или бетонной поверхности перед окраской не должна превышать 8%.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по подготовке поверхности стен под улучшенную масляную окраску выполняют в следующем порядке:
 
- очищают и сглаживают поверхность;
 
- расшивают трещины и олифят поверхность;
 
- производят частичную подмазку с проолифкой и шлифовкой подмазанных мест;
 
- производят сплошную шпаклевку и шлифовку поверхности.
 
Очистка поверхности (скребки на удлиненных ручках; рис.1). Маляры М1 и М2 скребками на удлиненных ручках очищают поверхность стен от затвердевших брызг раствора и шпаклевки.

                      
Рис.1
 
Сглаживание поверхности (обоймы с лещадью, столик-подмости). Маляр М1, стоя на столике-подмостях, удаляет с поверхности стен следы грубой затирки и другие шероховатости лещадью, закрепленной в обойме. Маляр М2 выполняет те же операции, стоя на полу.
 
Расшивка трещин (стальные шпатели, столик-подмости; рис.2). Маляр М1, стоя на столике-подмостях, а маляр М2 с попа углами шпателей расшивают трещины на глубину до 2 мм. Шпатель держат под углом в 45° к поверхности стены.

                      
Рис.2.
 
Проолифка поверхности (меховой валик, ванночка с сеткой; рис.3). Маляр М1 погружает валик в ванночку с олифой и, отжав излишки ее о сетку, наносит олифу на обрабатываемую поверхность стены. Маляр М2 подносит олифу к рабочему месту.

                      
Рис.3. 
Частичная подмазка (деревянные шпатели, ящик со шпаклевкой, столик-подмости; рис.4). Маляр М1, стоя на столике-подмостях, с помощью шпателя шпаклюет изъяны поверхности стены. Маляр М2 выполняет ту же работу, стоя на полу.

                 
Рис.4. 
Проолифка подмазанных мест (кисти-ручники, ведра, столик-подмости; рис.5). Маляр М1, стоя на столике-подмостях, а маляр М2 с пола олифят подмазанные места при помощи кистей-ручников.

                      
Рис.5.
 
Шлифовка подмазанных мест (колодки со шлифовальными шкурками, столик-подмости). Маляр М1, стоя на столике-подмостях, круговыми движениями колодки с закрепленной шлифовальной шкуркой выравнивает (шлифует) поверхность, устраняя неровности подмазки. Маляр М2 шлифует подмазанные места, стоя на полу.

                      
Рис.6. Шарнирная терка
 
Сплошная шпаклевка (деревянные шпатели, ящики со шпаклевкой, столик-подмости; рис.7). Маляр М1, стоя на столике, а маляр М2 с пола, деревянными шпателями наносят на поверхность стен ровный слой шпаклевки толщиной до 2 мм. Толщину наносимого слоя регулируют нажимом руки. Сглаживают шпаклевку движениями сверху вниз и слева направо, держа шпатели под углом 10-15° к поверхности.

                      
Рис.7.
 
Шлифовка шпаклевки (шарнирные терки; рис.8). Маляры М1 и М2, работая самостоятельно, шлифуют поверхность стен шарнирными терками для устранения всех неровностей шпаклевки. Шлифовка может производиться в любом направлении.

            
Рис.8.

       
Рис.9. Обойма для крепления лещади или пемзы 
1 - корпус;
 
2 - прижимной винт;
 
3 - рукоятка;
 
4 - пемза (лещадь).

            
Рис.10. Деревянная колодка для крепления шлифовальной шкурки 
1 - колодка;
 
2 - поролон;
 
3 - шкурка;
 
4 - стяжной болт.

 2. Огрунтовка и окраска поверхности

 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1. 

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Валик меховой на удлиненной ручке - 2;
 
Кисть-ручник - 1;
 
Ванночка с сеткой - 2;
 
Ведро для колера - 2;
 
Столик-подмости складной - 1. 

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо доставить на рабочее место инструменты и приспособления, а также закончить подготовку поверхности.
 
Окраска и огрунтовка выполняется готовыми масляными колерами, со держащими пигмент одного и того же цвета.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по улучшенной масляной окраске выполняют в следующем порядке: сначала огрунтовывают поверхность, а затем окрашивают ее масляным колером.
 
Огрунтовка поверхности (меховой валик, ванночка с сеткой; рис.11). Маляр М1 погружает валик в ванночку с огрунтовочным составом и, прокатив его по сетке для снятия излишков, наносит состав на обрабатываемую поверхность. Маляр М2 перемешивает огрунтовочный состав и подносит его к рабочему месту.

                 
Рис.11.
 
Окраска поверхности (меховой валик, ванночка с сеткой, кисть-ручник, ведро с колером, столик-подмости; рис.12). Маляр М1 кистью-ручником наносит полосы колера по верху стен и периметру оконных и дверных проемов. Маляр М2 погружает валик в ванночку с колером и, прокатив его по сетке для снятия излишков, наносит колер на поверхность стен движениями валика сверху вниз или снизу вверх, перекрывая кромки наносимых полос на 4-5 см.

                      
Рис.12.