КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12м 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, панелей - 8
 Затраты труда на установку панели, чел.-ч - 0,99 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Монтажник 5 разряда (М1)
 
Монтажник 4 разряда (М2)
 
Такелажник 3 разряда (Т) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп двухветвевой грузоподъемностью 6,3 т
 
Подкос бесструбцинный с универсальным захватом 2 шт.
 
Ящик-контейнер стальной для раствора
 
Столик-стремянка 2 шт.
 
Рейка-отвес
 
Лом монтажный 3 шт.
 
Лопата растворная 2 шт.
 
Кувалда
 
Кельма 2 шт. 

Щетка стальная для очистки закладных деталей
 
Подштопка 2 шт.

 До начала работ необходимо: 
- смонтировать фундаменты;
 
- произвести засылку пазух грунтом и песчаную подготовку под 
полы;
 
- определить монтажный горизонт - расчетную отметку положения низа монтируемых панелей и вынести оси стен на фундаменты;
 
- доставить на рабочее место инструмент, приспособления, инвентарь, материалы и расположить их в соответствии со схемой организации рабочего места.

 Описание операций
 
Подготовка панели к строповке 

Т осматривает поверхность панели, проверяет правильность расположения закладных деталей. При необходимости кувалдой скалывает наплывы бетона и щеткой очищает панель от грязи. Затем ломом проверяет прочность монтажных петель.

Рис.1 Строповка панели
       
По сигналу Т машинист крана подает двухветвевой строп к месту строповки. Т цепляет крюки стропа за монтажные петли и подает сигнал машинисту крана натянуть ветви стропа. Убедившись в надежности строповки, Т отходит в безопасную зону (на 4-5м). Машинист крана поднимает панель и подает ее к месту установки.

Рис.2 Устройство растворной панели 
М1 метлой очищает место установки панели, М2 лопатой подает раствор из ящика к месту установки панели и укладывает его грядкой по рискам. М1 расстилает раствор кельмой. М2, закончив подноску раствора, помогает М1.

Рис.3 Установка панели 
Машинист крана по сигналу М1 подает панель к месту установки. М1 и М2 принимают панель на расстоянии 20-30 см от перекрытия и разворачивают в нужном направлении. По сигналу М1 машинист крана плавно опускает панель на постель из раствора, а М1 устанавливает ее.

Рис.4 Выверка, временное крепление и расстроповка панели 
М1 и М2 проверяют по рискам правильность установки панели в плане. Незначительные отклонения устраняют рихтовкой низа панели монтажными ломами. Затем М1 и М2, поднявшись на столики-стремянки, зацепляют подкосы за монтажные петли панели. Второй конец подкоса с зажимом монтажники цепляют за петли, оставленные в ростверке или бетонном поясе. После этого М1 подает сигнал машинисту крана ослабить натяжение ветвей стропа. М1 и М2, поднявшись на столики-стремянки, расстроповывают панель. Вертикальность панели проверяется рейкой-отвесом. Установка панели в проектное положение производится с помощью фаркопов.

 
Уплотнение горизонтального шва раствором 
М1 и М2 уплотняют подштопкой раствор в горизонтальном шве, при необходимости добавляя его из ящика. Лишний раствор срезают кельмой, подбирают лопатой и укладывают в ящик или на место установки следующей панели.

 
Снятие временного крепления 
Временные крепления снимают после постоянного закрепления панели электросваркой. М1 вращением фаркопфа ослабляет натяжение подкосов и отцепляет их от петель в ростверке. М2 со столика-стремянки отцепляет второй конец подкоса от монтажной петли панели.